Постановление Правительства Алтайского края от 21.06.2018 N 220
"О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 N 479"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 20.04.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2018 г. N 220

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 16.10.2014 N 479

Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 N 479 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы" (в редакции от 29.04.2015 N 162, от 30.04.2015 N 168, от 28.08.2015 N 346, от 10.11.2015 N 448, от 02.03.2016 N 70, от 29.08.2016 N 300, от 30.01.2017 N 15, от 02.02.2017 N 20, от 20.06.2017 N 224, от 05.12.2017 N 434, от 07.02.2018 N 42) изменения согласно приложению.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края,
Председателя Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 21 июня 2018 г. N 220

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 16.10.2014 N 479

В государственной программе Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - "программа"):
в паспорте программы:
позицию "Участники программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"администрация г. Бийска (по согласованию)";
позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования программы	общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы в Алтайском крае" на 2015 - 2022 годы (далее также - "Программа") составляет 95217996,919 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 19732645,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1943733,2 тыс. рублей;
2016 год - 891766 тыс. рублей;
2017 год - 856365 тыс. рублей;
2018 год - 1095268,2 тыс. рублей;
2019 год - 3632071,3 тыс. рублей;
2020 год - 3639491,9 тыс. рублей;
2021 год - 3746995 тыс. рублей;
2022 год - 3926955 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 71462344,234 тыс. рублей, в том числе по годам;
2015 год - 7717602,7 тыс. рублей;
2016 год - 8828522,1 тыс. рублей;
2017 год - 8714834,8 тыс. рублей;
2018 год - 7876740 тыс. рублей;
2019 год - 8115925 тыс. рублей;
2020 год - 8368291 тыс. рублей;
2021 год - 10871214,3 тыс. рублей;
2022 год - 10969214,3 тыс. рублей;
из местного бюджета - 2332357 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 75723 тыс. рублей;
2018 год - 155029 тыс. рублей;
2019 год - 265300 тыс. рублей;
2020 год - 481100 тыс. рублей;
2021 год - 627630 тыс. рублей;
2022 год - 727575 тыс. рублей;
из средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" - 46650,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7321,643 тыс. рублей;
2018 год - 39328,442 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 1644000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 448000 тыс. рублей;
2018 год - 48000 тыс. рублей;
2019 год - 248000 тыс. рублей;
2020 год - 248000 тыс. рублей;
2021 год - 328000 тыс. рублей;
2022 год - 324000 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период";	

раздел 4 программы изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления.
Общий объем финансирования Программы составляет 95217996,919 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 19732645,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1943733,2 тыс. рублей;
2016 год - 891766 тыс. рублей;
2017 год - 856365 тыс. рублей;
2018 год - 1095268,2 тыс. рублей;
2019 год - 3632071,3 тыс. рублей;
2020 год - 3639491,9 тыс. рублей;
2021 год - 3746995 тыс. рублей;
2022 год - 3926955 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 71462344,234 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7717602,7 тыс. рублей;
2016 год - 8828522,1 тыс. рублей;
2017 год - 8714834,8 тыс. рублей;
2018 год - 7876740 тыс. рублей;
2019 год - 8115925 тыс. рублей;
2020 год - 8368291 тыс. рублей;
2021 год - 10871214,3 тыс. рублей;
2022 год - 10969214,3 тыс. рублей;
из местного бюджета - 2332357 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 75723 тыс. рублей;
2018 год - 155029 тыс. рублей;
2019 год - 265300 тыс. рублей;
2020 год - 481100 тыс. рублей;
2021 год - 627630 тыс. рублей;
2022 год - 727575 тыс. рублей;
из средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" - 46650,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7321,643 тыс. рублей;
2018 год - 39328,442 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 1644000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 448000 тыс. рублей;
2018 год - 48000 тыс. рублей;
2019 год - 248000 тыс. рублей;
2020 год - 248000 тыс. рублей;
2021 год - 328000 тыс. рублей;
2022 год - 324000 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.";
отдельные позиции таблицы 1 программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
отдельные позиции таблицы 2 программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
таблицу 3 программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
таблицу 4-А программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
в приложении к программе:
в подпрограмме 1 программы:
в паспорте подпрограммы 1 позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" (далее также - "Подпрограмма 1") составляет 1624203,6 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 1068203,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13923,4 тыс. рублей;
2016 год - 19526,2 тыс. рублей;
2017 год - 39446 тыс. рублей;
2018 год - 64700 тыс. рублей;
2019 год - 9504 тыс. рублей;
2020 год - 9504 тыс. рублей;
2021 год - 466800 тыс. рублей;
2022 год - 444800 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 556000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 280000 тыс. рублей;
2022 год - 276000 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период";	

раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Объем финансирования Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1599203,6 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 1043203,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13923,4 тыс. рублей;
2016 год - 19526,2 тыс. рублей;
2017 год - 39446 тыс. рублей;
2018 год - 39700 тыс. рублей;
2019 год - 9504 тыс. рублей;
2020 год - 9504 тыс. рублей;
2021 год - 466800 тыс. рублей;
2022 год - 444800 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 556000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 280000 тыс. рублей;
2022 год - 276000 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.";
в подпрограмме 2 программы:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию "Участники подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"администрация г. Новоалтайска, комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (по согласованию)";
в абзацах девятом и десятом позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" слова "местного значения" исключить;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края" (далее также - "Подпрограмма 2") составляет 89112806,819 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 19732645,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1943733,2 тыс. рублей;
2016 год - 891766 тыс. рублей;
2017 год - 856365 тыс. рублей;
2018 год - 1095268,2 тыс. рублей;
2019 год - 3632071,3 тыс. рублей;
2020 год - 3639491,9 тыс. рублей;
2021 год - 3746995 тыс. рублей;
2022 год - 3926955 тыс. рублей;
из краевого бюджета (дорожный фонд Алтайского края) - 67121154,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7346145,6 тыс. рублей;
2016 год - 8523257,7 тыс. рублей;
2017 год - 8377569,8 тыс. рублей;
2018 год - 7281833 тыс. рублей;
2019 год - 7796214 тыс. рублей;
2020 год - 8048580 тыс. рублей;
2021 год - 9813777 тыс. рублей;
2022 год - 9933777 тыс. рублей;
из местного бюджета - 2212357 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 75723 тыс. рублей;
2018 год - 155029 тыс. рублей;
2019 год - 265300 тыс. рублей;
2020 год - 481100 тыс. рублей;
2021 год - 567630 тыс. рублей;
2022 год - 667575 тыс. рублей;
из средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" - 46650,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7321,643 тыс. рублей;
2018 год - 39328,442 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Алтайского края и федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период";	

в абзацах десятом и одиннадцатом позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" слова "местного значения" исключить;
абзацы пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой раздела 1 изложить в следующей редакции:
"доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в рамках реализации ПКРТИ Барнаульской городской агломерации (в 2018 году - не менее 63,8% протяженности дорожной сети, в 2025 году - 87%);
доля мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования в рамках реализации ПКРТИ Барнаульской городской агломерации к уровню 2016 года (в 2018 году - 50%, в 2022 году - 24%, в 2025 году - 15%);";
в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом раздела 2 слова "местного значения" исключить;
абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2015 - 2022 годах составляет 89112806,819 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19732645,6 тыс. рублей, средств дорожного фонда Алтайского края - 67121154,1 тыс. рублей, средств местного бюджета - 2212357 тыс. рублей, средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" - 46650,085 тыс. рублей.";
в подпрограмме 3 программы:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 3 число "2774935,7" заменить числом "2874008,7";
в разделе 3:
число "2774935,7" заменить числом "2874008,7";
в позициях "2018 год", "2019 год" и "2020 год" числа "270109", "270109", "458200" заменить числами "502497", "297497", "297497" соответственно;
в подпрограмме 4 программы:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 число "162052,2" заменить числом "171209,2";
в разделе 3:
число "162052,2" заменить числом "171209,2";
в позициях "2018 год" и "2020 год" числа "12710" и "18553" заменить числами "27710" и "12710" соответственно;
в подпрограмме 5 программы:
паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие городского электрического
транспорта"

Соисполнитель государственной программы	Минстройтранс Алтайского края	
Участники подпрограммы	администрация г. Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула (по согласованию);
администрация г. Новоалтайска (по согласованию);
администрация г. Бийска (по согласованию)	
Цель подпрограммы	повышение доступности услуг городского электрического транспорта	
Задачи подпрограммы	повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг;
обеспечение безопасности функционирования городского электрического транспорта	
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов, единиц;
количество модернизированных и отремонтированных трамваев, единиц;
количество модернизированных тяговых подстанций, единиц;
протяженность замененных кабельных линий тяговых подстанций, км;
протяженность реконструированных трамвайных путей, км	
Срок реализации подпрограммы	2015 - 2022 годы без деления на этапы	
Объемы финансирования подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы 5 "Развитие городского электрического транспорта" (далее также - "Подпрограмма 5") составляет 347768,6 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 227768,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 113884,3 тыс. рублей;
2022 год - 113884,3 тыс. рублей;
из местного бюджета - 120000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 60000 тыс. рублей;
в 2022 году - 60000 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	количество приобретаемого нового подвижного состава городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2014 годом возрастет в 3 раза;
количество модернизированного и отремонтированного подвижного состава городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 25 единиц;
количество модернизированных тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2021 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 19 единиц;
протяженность замененных кабельных линий тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 3,6 км;
протяженность реконструированного верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула в 2022 году по сравнению с 2014 годом возрастет в 7,8 раз";	

абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Количество пассажирского подвижного состава муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" г. Барнаула и муниципального унитарного предприятия "Трамвайное управление" г. Бийска составляет 324 трамвая и 60 троллейбусов. Стопроцентный износ имеют (по состоянию на 01.12.2017) 87,3% трамваев и 83% троллейбусов.";
разделы 2 - 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели достижения целей
и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы 5 является повышение доступности услуг городского электрического транспорта для населения.
Достижение цели будет обеспечено за счет обеспечения безопасности функционирования городского электрического транспорта и повышения надежности, качества предоставления населению транспортных услуг.
Реализация данных задач возможна при условии выполнения реконструкции верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула с использованием современных и инновационных технологий и материалов, обеспечивающих снижение вибрации и корпусного шума трамвайных вагонов, модернизации тяговых подстанций и их кабельных линий, а также за счет обновления, модернизации и ремонта подвижного состава городского электрического транспорта для городов Бийска, Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной линии.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5:
количество приобретаемого нового подвижного состава городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2014 годом возрастет в 3 раза;
количество модернизированного и отремонтированного подвижного состава городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 25 единиц;
количество модернизированных тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2021 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 19 единиц;
протяженность замененных кабельных линий тяговых подстанций городского электрического транспорта в 2022 году по сравнению с 2017 годом возрастет на 3,6 км;
протяженность реконструированного верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула в 2022 году по сравнению с 2014 годом возрастет в 7,8 раз.

3. Объем финансирования Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 347768,6 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 227768,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 113884,3 тыс. рублей;
2022 год - 113884,3 тыс. рублей;
из местного бюджета - 120000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 60000,0 тыс. рублей;
2022 год - 60000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.".

Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16 октября 2014 г. N 479

Таблица 1

Сведения
об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их
значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение по годам	
			2013 (факт)	2014 (оценка)	годы реализации государственной программы	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Государственная программа Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы	
<...>	
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	%	47,20	47,71	48,28	48,78	49,28	49,78	50,28	50,78	51,28	51,78	
<...>	
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"	
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края, в том числе	км	55235,5	55320,2	54924,6	54932,3	54932,3	55068,9	55100,3	55125,3	55150,3	55175,3	
1.1.	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	16089,5	16090,2	16106,6	16122,1	16143	16155,7	16187,1	16212,1	16237,1	16262,1	
1.2.	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	39146	39230	38818	38810,2	38789,3	38913,2	38913,2	38913,2	38913,2	38913,2	
2.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе	км	73,5	55,6	68,7	60	37,9	40	45	55	55	55	
2.1.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	73,5	55,6	59,1	41	27,9	30	35	45	45	45	
2.2.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	км	-	-	9,6	19	10	10	10	10	10	10	
3.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог	км	59	55,6	44,6	36	17,2	10	10	25	25	25	
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	14,5	-	14,5	5	10,7	20	25	20	20	20	
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	-	31,9	32,5	47,1	60,1	58,1	48,4	48,6	48,9	49,1	
6.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	7597,2	7684,7	7776,3	7864,4	7952,4	8045,5	8138,9	8232,5	8326,4	8420,5	
<...>	
10.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в рамках реализации ПКРТИ Барнаульской городской агломерации	%	-	-	-	44,4	54	63,8	68,7	72,8	75,6	78,5	
11.	Доля мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования в рамках реализации ПКРТИ Барнаульской городской агломерации к уровню 2016 года	%	-	-	-	100	70	50	38	32	27	24	
<...>	
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"	
1.	Количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов	ед.	6	2	-	-	-	-	-	-	3	3	
2.	Протяженность реконструированных трамвайных путей	км	0,26	-	-	-	-	-	-	-	1,015	1,015	
3.	Количество модернизированных и отремонтированных трамваев	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	
4.	Количество модернизированных и отремонтированных тяговых подстанций	ед.	-	-	-		-	-	-	-	19	-	
5.	Протяженность замененных кабельных линий тяговых подстанций	км	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,4	
<...>	

Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16 октября 2014 г. N 479

Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Сроки реализации	Участники программы	Сумма расходов (тыс. рублей)	Источники финансирования	
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"	
1.	Цель 1. Развитие региональной и международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения	2015 - 2022 годы		13923,4	19526,2	39446	64700	9504	9504	746800	720800	1624203,6	всего	
													в том числе	
				13923,4	19526,2	39446	64700	9504	9504	466800	444800	1068203,6	краевой бюджет	
				-	-	-	-	-	-	280000	276000	556000	внебюджетные источники	
<...>	
7.	Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края			10200	14208	14208	9504	9504	9504	14800	14800	96728	всего	
													в том числе	
				10200	14208	14208	9504	9504	9504	14800	14800	96728	краевой бюджет	
8.	Мероприятие 1.3.1. Использование авиации для оказания медицинской помощи населению		Министерство здравоохранения Алтайского края,
ООО "Алтайские авиалинии" (по со согласованию)	4704	4704	4704	-	-	-	4900	4900	23912	всего	
													в том числе	
				4704	4704	4704	-	-	-	4900	4900	23912	краевой бюджет	
9.	Мероприятие 1.3.2. Использование авиации для исполнения полномочий ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"		управление Алтайского края по промышленности и энергетике,
ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае",
ООО "Алтайские авиалинии" (по согласованию)	1997	4704	4704	4704	4704	4704	4900	4900	35317	всего	
													в том числе	
				1997	4704	4704	4704	4704	4704	4900	4900	35317	краевой бюджет	
10.	Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края		Минстройтранс Алтайского края	3499	4800	4800	4800	4800	4800	5000	5000	37499	всего	
													в том числе	
				3499	4800	4800	4800	4800	4800	5000	5000	37499	краевой бюджет	
11.	Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок			3422,4	4238	25238	55196	-	-	-	-	88094,4	всего	
													в том числе	
				3422,4	4238	25238	55196	-	-	-	-	88094,4	краевой бюджет	
12.	Мероприятие 1.4.1. Субсидирование авиаперевозчиков, осуществляющих воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне		Минстройтранс Алтайского края	3422,4	4238	4238	30196	-	-	-	-	42094,4	всего	
													в том числе	
				3422,4	4238	4238	30196	-	-	-	-	42094,4	краевой бюджет	
12.1.	Мероприятие 1.4.2. Субсидирование авиапредприятий на поддержание летной годности вертолетов		Минстройтранс Алтайского края	-	-	21000	-	-	-	-	-	21000	всего	
													в том числе	
				-	-	21000	-	-	-	-	-	21000	краевой бюджет	
12.2.	Мероприятие 1.4.3. Субсидирование авиапредприятий на поддержание в эксплуатационном состоянии аэродромной инфраструктуры		Минстройтранс Алтайского края	-	-	-	25000	-	-	-	-	25000	всего	
													в том числе	
				-	-	-	25000	-	-	-	-	25000	краевой бюджет	
<...>	
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"	
24.	Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры	2015 - 2022 годы		9289878,8	9415023,7	9316979,477	8571458,642	11693585,3	12169171,9	14128402	14528307	89112806,819	всего	
													в том числе	
				1943733,2	891766	856365	1095268,2	3632071,3	3639491,9	3746995	3926955	19732645,6	федеральный бюджет	
				7346145,6	8523257,7	8377569,834	7281833	7796214	8048580	9813777	9933777	67121154,134	краевой бюджет	
				-	-	75723	155029	265300	481100,0	567630	667575	2212357	местный бюджет	
				-	-	7321,643	39328,442	-	-	-	-	46650,085	средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	
25.	Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения			9289878,8	9415023,7	9316979,477	8571458,642	11693585,3	12169171,9	14128402	14528307	89112806,819	всего	
													в том числе	
				1943733,2	891766	856365	1095268,2	3632071,3	3639491,9	3746995	3926955	19732645,6	федеральный бюджет	
				7346145,6	8523257,7	8377569,834	7281833	7796214	8048580	9813777	9933777	67121154,134	краевой бюджет	
				-	-	75723	155029	265300	481100,0	567630	667575	2212357	местный бюджет	
				-	-	7321,643	39328,442	-	-	-	-	46650,085	средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	
26.	Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4		Минстройтранс Алтайского края,
КГКУ "Алтайавтодор",
органы местного самоуправления (по согласованию)	9289878,8	9415023,7	9316979,477	8571458,642	11693585,3	12169171,9	14128402	14528307	89112806,819	всего	
													в том числе	
				1943733,2	891766	856365	1095268,2	3632071,3	3639491,9	3746995	3926955	19732645,6	федеральный бюджет	
				7346145,6	8523257,7	8377569,834	7281833	7796214	8048580	9813777	9933777	67121154,134	краевой бюджет	
				-	-	75723	155029	265300	481100,0	567630	667575	2212357	местный бюджет	
				-	-	7321,643	39328,442	-	-	-	-	46650,085	средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	
Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"	
27.	Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта	2015 - 2022 годы		333434,7	256574	270109	502497	297497	297497	458200	458200	2874008,7	всего	
													в том числе	
				333434,7	256574	270109	502497	297497	297497	458200	458200	2874008,7	краевой бюджет	
28.	Задача 3.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении			333434,7	256574	270109	502497	297497	297497	458200	458200	2874008,7	всего	
													в том числе	
				333434,7	256574	270109	502497	297497	297497	458200	458200	2874008,7	краевой бюджет	
29.	Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам		Минстройтранс Алтайского края	333434,7	256574	270109	297497	297497	297497	458200	458200	2669008,7	всего	
													в том числе	
				333434,7	256574	270109	297497	297497	297497	458200	458200	2669008,7	краевой бюджет	
29.1.	Мероприятие 3.1.2. Обновление подвижного состава для обеспечения перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении		Минстройтранс Алтайского края	-	-	-	205000	-	-	-	-	205000	всего	
													в том числе	
				-	-	-	205000	-	-	-	-	205000	краевой бюджет	
Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"	
30.	Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта	2015 - 2022 годы		24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	всего	
													в том числе	
				24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	краевой бюджет	
31.	Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта			24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	всего	
													в том числе	
				24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	краевой бюджет	
32.	Мероприятие 4.1.1. Организация работ и оказания услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края, и субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении		Минстройтранс Алтайского края	24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	всего	
													в том числе	
				24099	29164,2	27710	27710	12710	12710	18553	18553	171209,2	краевой бюджет	
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"	
33.	Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта	2015 - 2022 годы		-	-	-	-	-	-	173884,3	173884,3	347768,6	всего	
													в том числе	
				-	-	-	-	-	-	113884,3	113884,3	227768,6	краевой бюджет	
				-	-	-	-	-	-	60000	60000	120000	местный бюджет	
34.	Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг			-	-	-	-	-	-	156604,3	156604,3	313208,6	всего	
				-	-	-	-	-	-				в том числе	
				-	-	-	-	-	-	96604,3	96604,3	193208,6	краевой бюджет	
				-	-	-	-	-	-	60000	60000	120000	местный бюджет	
35.	Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной линии		Минстройтранс Алтайского края,
администрация г. Барнаула (по согласованию),
администрация г. Новоалтайска (по согласованию)	-	-	-	-	-	-	36604,3	36604,3	73208,6	всего	
													в том числе	
				-	-	-	-	-	-	36604,3	36604,3	73208,6	краевой бюджет	
35.1.	Мероприятие 5.1.2. Модернизация и ремонт подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий городского электрического транспорта для городов Барнаула и Бийска		Минстройтранс Алтайского края,
администрация г. Барнаула (по согласованию),
администрация г. Новоалтайска (по согласованию);
администрация г. Бийска (по согласованию)	-	-	-	-	-	-	120000	120000	240000	всего	
													в том числе	
				-	-	-	-	-	-	60000	60000	120000	краевой бюджет	
				-	-	-	-	-	-	60000	60000	120000	местный бюджет	
36.	Задача 5.2. Обеспечение безопасности функционирования городского электрического транспорта			-	-	-	-	-	-	17280	17280	34560	всего	
													в том числе	
				-	-	-	-	-	-	17280	17280	34560	краевой бюджет	
37.	Мероприятие 5.2.1. Реконструкция верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула		Минстройтранс Алтайского края,
администрация г. Барнаула (по согласованию)	-	-	-	-	-	-	17280	17280	34560	всего	
													в том числе	
				-	-	-	-	-	-	17280	17280	34560	краевой бюджет	
<...>	

Приложение 3
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16 октября 2014 г. N 479

Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники и направления расходов	Сумма расходов (тыс. рублей)	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего финансовых затрат	9661335,9	9720288,1	10102244,477	12261296,642	12261296,3	12736882,9	15573839,3	15947744,3	95217996,919	
в том числе										
из федерального бюджета	1943733,2	891766	856365	1095268,2	3632071,3	3639491,9	3746995	3926955	19732645,6	
из краевого бюджета	7717602,7	8828522,1	8714834,834	7876740	8115925	8368291	10871214,3	10969214,3	71462344,234	
из местного бюджета	-	-	75723	155029	265300	481100	627630	727575	2332357	
средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	-	-	7321,643	39328,442	-	-	-	-	46650,085	
из внебюджетных источников	-	-	448000	48000	248000	248000	328000	324000	1644000	

Приложение 4
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16 октября 2014 г. N 479

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы (в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке (корректировке) региональных
программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного
хозяйства и на основании письма Министерства транспорта
Российской Федерации от 18.03.2015 N ОБ-2з/2903)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации	Объемы ресурсного обеспечения	
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	итого 2015 - 2022 годы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего		105	0409	-	-	9289878,8	9415023,7	9316979,477	8571458,642	11693585,3	12169171,9	14128402	14528307	89112806,819	
в том числе:															
Основное мероприятие 1. Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	-	-	858685,26	916669,746	1128460,272	1395189,631	938472,7	981052,1	2127821	2127821	10474171,709	
		105	0409	-	-	1440299,7	722216	218865	330268,2	1574294,3	1581714,9	1688178	1688178	9244014,1	
															
из них															
Мероприятие 1.1. Осуществление крупных и особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов		105	0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие 1.2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	-	-	858685,26	916669,746	1128460,272	1395189,631	938472,7	981052,1	2127821	2127821	10474171,709	
		105	0409	-	-	1440299,7	722216	218865	330268,2	1574294,3	1581714,9	1688178	1688178	9244014,1	
в том числе:															
1.2.1. в рамках дорожного фонда Алтайского края		105	0409	1721727, 1720017270	400	668230,225	660190,746	919725,038	1232061	638472,7	681052,1	2000000	2000000	8799731,809	
		105	0409	1725420, 1720054200	400	1110542,7	526214,6	-	-	1398367	1398367	1398367	1398367	7230225,300	
1.2.2. в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" или в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"		105	0409	1721728, 17200R0184, 17200R5674	400	182430,389	256479	208735,234	163128,631	300000	300000	127821	127821	1666415,254	
		105	0409	1725018, 1720050180, 17200R5674	400	177690	196001,4	218865	330268,2	175927,3	183347,9	289811	289811	1861721,8	
1.2.3. в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"		105	0409	1721727, 1720017270	400	8024,646	-	-	-	-	-	-	-	8024,646	
		105	0409	1605110	400	152067	-	-	-	-	-	-	-	152067	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений		-	-	-	-	-	23317,521	-	-	35600	35600	35720	55720	185957,521	
		-	-	-	-	-	82550	-	-	320400	320400	321440	501400	1546190	
из них:															
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция уникальных искусственных сооружений, реализация дорожной деятельности в отношении которых осуществляется во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие 2.2. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии		-	-	-	-	-	23317,521	-	-	35600	35600	35720	55720	185957,521	
		-	-	-	-	-	82550	-	-	320400	320400	321440	501400	1546190	
Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	1721727, 1720017270	200, 400	4962684,939	4940121,497	4733372,067	4097122,569	5024016,3	5179302,9	5874150	5974150	40784920,272	
		105	0409	1725390	200	503433,5	87000	-	-	1047377	1047377	1047377	1047377	4779941,500	
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	1721727, 1720017270	200	66004,004	121465,971	142611,072	24600	200000	200000	167680	167680	1090041,047	
		105	0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	1721727, 1720017270	200	2708883,161	2592426,775	2182481,104	1572522,569	2224016,3	2279302,9	2906470	2906470	19372572,809	
		105	0409	-	-	-	87000	-	-	523000	523000	523000	523000	2179000,000	
Основное мероприятие 3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения		105	0409	1721727, 1720017270	200	2187797,774	2226228,751	2408279,891	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000	20322306,416	
		105	0409	175390	200	503433,5	-	-	-	524377	524377	524377	524377	2600941,500	
Основное мероприятие 4. Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства		105	0409	1721726, 1721726, 1720017260, 1720017270	100, 200, 400 850	1124775,401	2124086,936	1865102,895	1318789	1397500	1452000	1575461	1575461	12433176,232	
		105	0409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 5. Предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		105	0409	1727103, 1720071030		400000	519062	648968	464535	400000	400000	200000	200000	3232565	
															
Основное мероприятие 6. Предоставление средств на развитие транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации	всего	-	-	-	-	-	-	713223	920029	955300	1171100	1257630	1357575	6374857	
	в том числе														
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	637500	765000	690000	690000	690000	690000	4162500	
	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	75723	155029	265300	481100	567630	667575	2212357	
Основное мероприятие 7. Премия Губернатора Алтайского края "За верность профессии" имени Василия Гольцова	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	625	625	625	625	625	625	3750	
Основное мероприятие 8. Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в монопрофильных муниципальных образованиях	всего	-	-	-	-	-	-	8363,243	44900,242	-	-	-	-	53263,485	
	в том числе														
	краевой бюджет	105	409	1720071030	400	-	-	1041,600	5571,800	-	-	-	-	6613,400	
	средства некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	105	409	1720071501	400	-	-	7321,643	39328,442	-	-	-	-	46650,085	
Справочно к мероприятию 6: суммарный объем краевого бюджета на развитие транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения)	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	589132,913	706092	499900	794200	182000	182000	2953324,913	
в том числе:															
в рамках государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав граждан и их безопасности" на 2015 - 2020 годы		-	-	-	-	-	-	40800	46200	9900	8700	-	-	105600	
субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		-	-	-	-	-	-	151886,2	174992	150000	150000	150000	150000	926878,2	
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения		-	-	-	-	-	-	396446,713	484900	340000	635500	32000	32000	1920846,713	
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов		-	-	-	-	1650690,2	2410401	2033177	1295000	1419000	1517000	1517000	1517000	13359268,2	
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего		-	-	-	-	1943733,2	891766	856365	1095268,2	3632071,3	3639491,9	3746995	3926955	19732645,6	
в том числе:															
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)		-	-	-	-	329757	196001,4	218865	330268,2	175927,3	183347,9	289811	289811	2013788,8	
иные межбюджетные трансферты		-	-	-	-	1613976,2	695764,6	637500	765000	3456144	3456144	3457184	3637144	17718856,8	

Приложение 5
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Администрации Алтайского края
от 16 октября 2014 г. N 479

Таблица 4-А

Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых
в рамках подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы

N п/п	Наименование объектов	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов	Срок ввода в эксплуатацию	Мощность по проектно-сметной документации	Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений (км)	Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)	Подлежит выполнению до конца строительства	Объем финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам	
				км	из них искусственные сооружения (пог. м)			км	из них искусственных сооружений, (пог. м)	остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)	2017	2018	2019	До конца строительства или срока действия Программы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Всего			648,516	2251,91	10,824	80210927,59	645,316	2251,91	79724644,95	1251205,06	2262405,02	9761985,13	-	
	в том числе по объектам:														
1.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Мезенцево в Тюменцевском районе (Алтайский край)	31.03.2016 N 22-1-1-30038-16,
31.03.2016 N 3-2-10018-16	2017 год	0,709	-	-	24604,372	0,709	-	21204,362	21204,362	-	-	-	
2.	Строительство автомобильной дороги Табуны - Граничное в Табунском районе. Подъезд к с. Камышенка (Алтайский край)	01.07.2013 N 22-1-50126-13,
01.07.2013 N 3-2-10066-13	2017 год	3,25	-	-	45327,14	3,25	-	41785,23	41785,23	-	-	-	
3.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. им. Калинина в Петропавловском районе Алтайского края	07.07.2015 N 22-1-50082-15,
07.07.2015 N 3-2-10045-15	2017 год	0,7	-	-	38444,231	0,7	-	34871,191	34871,191	-	-	-	
4.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Красноармейскому в Немецком национальном районе (Алтайский край)	24.06.2016 N 22-1-1-30071-16,
24.06.2016 N 3-2-10038-16	2017 год	7,74	-	-	146239,081	7,74	-	142468,211	142468,21	-	-	-	
5.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Беленькое в Угловском районе Алтайского края	29.03.2016 N 22-1-1-30034-16,
29.03.2016 N 3-2-10015-16	2017 год	0,628	-	-	23954,682	0,628	-	21126,662	21126,662	-	-	-	
6.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Михайловка в Топчихинском районе	17.12.2015 N 22-1-50145-15,
17.12.2015 N 3-2-10086-15	2017 год	0,857	-	-	32376,686	0,857	-	29283,096	29283,096	-	-	-	
7.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Борисовка в Угловском районе Алтайского края	15.07.2015 N 22-1-50085-15,
15.07.2015 N 3-2-10046-15	2017 год	0,735	-	-	23790,090	0,735	-	21094,8	21094,8	-	-	-	
8.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Новоплотава в Хабарском районе (Алтайский край)	05.09.2016 N 22-1-1-30091-16,
05.09.2016 N 3-2-10051-16	2017 год	1,185	-	-	38481,622	1,185	-	34723,532	34723,532	-	-	-	
9.	Строительство подъезда к племенному комплексу на 1100 голов ОАО "Промышленный" в Бийском районе (Алтайский край)	15.07.2016 N 22-1-1-30078-16,
15.07.2016 N 3-2-10041-16	2017 год	1,369	-	-	29817,56	1,369	-	26684,05	26684,05	-	-	-	
10.	Строительство подъезда к заводу по производству молочной продукции ООО "Сростинский" в Бийском районе (Алтайский край)	22.04.2016 N 22-1-1-30051-16,
22.04.2016 N 3-2-10026-16	2017 год	1,738	-	-	46449,148	1,738	-	43276,958	43276,958	-	-	-	
11.	Строительство подъезда к "Генетическому центру "Корова и теленок" на 2400 голов ООО "АПО "Казачья станица" в Тюменцевском районе (Алтайский край)	23.08.2016 N 22-1-1-30085-16,
23.08.2016 N 3-2-10045-16	2017 год	0,449	-	-	13860,522	0,449	-	11082,142	11082,142	-	-	-	
12.	Реконструкция автомобильной дороги Барнаул - Камень-на-Оби - ф. Новосибирской области, км 48 - км 55 в Павловском районе	11.01.2016 N 22-1-1-30003-16,
11.01.2016 N 3-2-10001-16	2016 - 2018 годы	5,8	-	-	841199,16	2,6	-	489156,73	96547,286	392609,44	-	-	
13.	Строительство автомобильной дороги пос. Первомайский - с. Заветы Ильича	2017 год	2017 - 2018 годы	5,77	-	-	150000	5,77	-	150000	27721,213	122278,79	-	-	
14.	Строительство автомобильной дороги Маралиха - Куйбышево - Чинета - Генералка, км 35 + 500 - км 40 + 043 в Краснощековском районе	02.06.2015 N 22-1-50070-15,
02.06.2015 N 22-1-60013-15	2017 год	1,5	-	-	43103,82	1,5	-	38138,94	38138,94	-	-	-	
15.	Реконструкция автомобильной дороги до с. Протасово Немецкого национального района Алтайского края	30.04.2010 N 22-1-50100-10	2017 год	1,5	-	-	47781,65	1,5	-	44706,98	44706,98	-	-	-	
16.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Калиновка в Рубцовском районе	24.06.2016 N 22-1-1-30070-16,
24.06.2016 N 3-2-10037-16	2017 год	1,071	-	-	29941,67	1,071	-	27541,66	27541,66	-	-	-	
17.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Еланда в Целинном районе	25.08.2016 N 22-1-1-30087-16,
25.08.2016 N 3-2-10046-16	2017 - 2018 годы	5,335	-	-	185421,29	5,335	-	180561,29	100000	80561,29	-	-	
18.	Реконструкция автомобильной дороги Советское - Урожайное - Шульгин Лог, км 0 + 000 - км 0 + 600 (устройство искусственного освещения на мосту через р. Каменка) в с. Советское Советского района	05.09.2016 N 22-1-1-30090-16,
05.09.2016 N 3-2-10050-16	2017 год	-	-	-	6143,85	-	-	4443,85	4443,85	-	-	-	
19.	Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, км 5 + 700 - км 9 + 200 с подъездом к хлебоприемному пункту (ХПП) (устройство искусственного электроосвещения) в с. Поспелиха Поспелихинского района	25.10.2016 N 22-1-1-30102-16,
25.10.2016 N 3-2-10055-16	2017 год	-	-	-	38004,05	-	-	33004,04	33004,04	-	-	-	
20.	Строительство мостового перехода на автомобильной дороге Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово, км 33 + 420 в Первомайском районе	24.02.2016 N 22-1-1-30024-16,
24.02.2016 N 3-2-10011-16	2016 - 2017 годы	0,323	13,1	1,19	46274,307	0,323	13,1	18526,947	18526,947	-	-	-	
21.	Реконструкция автомобильной дороги Алейск - Кировское - Новоникольский - Дубровский, км 9 + 650 - км 9 + 950 с мостом через р. Чистюнька в Алейском районе	2017 год	2017 - 2018 годы	-	40	2,15	83720	-	40	80000	52000	28000	-	-	
22.	Реконструкция автомобильной дороги Приятельский - Осколково - а/д К13 км 12 + 050 - км 12 + 350 с мостовым переходом через р. Порозиха в Алейском районе	07.07.17 N 22-1-1-3-044-17
07.07.17 N 2-6-1-0140-17	2017 год	-	46,5	1,612	64994	-	46,5	64457,399	64457,399	-	-	-	
23.	Реконструкция автомобильной дороги К08 - Долганка - Волчно-Бурлинское, км 19 + 000 - км 21 + 000 с мостовым переходом через реку без названия в Крутихинском районе	01.06.2017 N 22-1-1-3-0036-17
01.06.2017 N 2-6-1-0123-17	2017 - 2018 годы	-	9,5	1,075	45000	-	9,5	45000	34000	11000	-	-	
24.	Реконструкция путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Белоярск - Заринск км 1 + 293 в Первомайском районе	2017 год	2017 - 2018 годы	0,1	33	-	200000	0,1	33	200000	20000	180000	-	-	
25.	Реконструкция автомобильной дороги Потеряевка - Новониколаевка - Саратовка, км 24 + 600 - км 24 + 900 с мостом через ручей без названия в Рубцовском районе	14.03.2017 N 22-1-1-30025-17,
14.03.2017 N 2-6-10024-17	2017 год	0,306	15,71	0,813	30245,96	0,306	15,71	30245,96	30245,96	-	-	-	
26.	Строительство мостового перехода через ручей без названия на автомобильной дороге Быканов Мост - Солоновка - Солонешное граница Республики Алтай, км 123 + 997 в Солонешенском районе	10.05.2016 N 22-1-1-30057-16,
10.05.2016 N 3-2-10031-16	2017 год	0,369	13,51	0,793	33012,59	0,369	13,51	29497,7	29497,7	-	-	-	
27.	Строительство мостового перехода через ручей Захаров на автомобильной дороге Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай, км 127 + 826 в Солонешенском районе	22.04.2016 N 22-1-1-30049-16,
22.04.2016 N 3-2-10025-16	2017 год	0,316	9,68	0,868	35586,48	0,316	9,68	32310,93	32310,93	-	-	-	
28.	Реконструкция автомобильной дороги Ненинка - Новая Ажинка, км 0 + 000 - км 0 + 500 с мостом через р. Неня в с. Ненинка Солтонского района	14.03.2017 N 22-1-1-30021-17,
14.03.2017 N 2-6-10021-17	2017 - 2018 годы	0,3	101	-	150000	0,3	101	150000	24000	126000	-	-	
29.	Строительство мостового перехода через р. Алей на автомобильной дороге Н-4903 Топчиха - Хабазино - Красноярка - Нагорный, км 24 + 830 в Топчихинском районе	07.04.2016 N 22-1-1 - 30042-16,
07.04.2016 N 3-2-10019-16	2017 год	0,52	101,7	2,323	89746,39	0,52	101,7	86461,92	86461,92	-	-	-	
30.	Строительство моста через р. Увальная на автомобильной дороге Мартыново - Тогул - Залесово, км 138 + 252 в Заринском районе	17.05.2012 N 22-1-5
0129-12	2017 - 2018 года	-	-	-	56818,34	-	-	53058,67	30000	23058,67	-	-	
31.	Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Р. Казахстан, км 9 + 117 - км 9 + 837 с мостом через р. Алей в Поспелихинском районе	27.02.2017 N 22-1-1-3-0011-17
27.02.2017 N 2-6-1-005-17	2017 - 2019 годы	-	133,6	-	241795,500	-	133,6	250000	30000	130000	90000	-	
32.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Советский Путь, км 1 + 510 - км 1 + 860, с искусственным сооружением через суходол в Локтевском районе (труба)	05.05.2017 N 22-1-1-3-0031-17
05.05.2017 N 2-6-1-0103-17	2018 год	-	-		18410,09	-	-	19500	-	19500	-	-	
33.	Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, км 28 + 480 - км 28 + 780 с мостом через р. Поперечная (км 28 + 631) в Поспелихинском районе	2018 год	2018 - 2019 годы	-	83,73	-	150000	-	83,73	150000	-	75000	75000	-	
34.	Строительство автомобильной дороги Карагуж - Горный, км 2 + 550 - км 3 + 150 с мостом через р. Иша в Красногорском районе	29.05.2017 N 22-1-1-3-0034-17
29.05.2017 N 1-6-1-0119-17	2018 - 2018 - 9 годы	-	-	-	108969,310	-	-	115000	-	80000	35000	-	
35.	Реконструкция автомобильной дороги Барнаул - Камень-на-Оби - гр. Новосибирской области км 122 + 000 - км 125 + 000; км 130 + 000 - км 134 + 500 в Шелаболихинском районе	2018 год	2018 год	7,5	-	-	165000	7,5	-	165000	-	165000	-	-	
36.	Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, км 35 + 700 - км 51 + 000; км 53 + 900 - км 60 + 600 в Поспелихинском и Курьинском районах	2018 год	2018 год	22	-	-	286000	22	-	286000	-	286000	-	-	
37.	Реконструкция автомобильной дороги Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь, км 36 + 410 с мостом через р. Ая в Алтайском районе	2019 год	2020 год	-	37	-	60000	-	37	60000	-	-	-	60000	
38.	Реконструкция автомобильной дороги Залесово - Борисово - Никольский, км 19 + 020 с мостом через р. Татарка в Залесовском районе	2018 год	2019 год	-	-	-	50000	-	-	50000	-	-	50000	-	
39.	Реконструкция автомобильной дороги Барнаул - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области, км 154 + 380 - км 154 + 580 с мостом через Сухой Лог в Каменском районе	2018 год	2019 год	-	10	-	30000	-	10	30000	-	-	30000	-	
40.	Реконструкция автомобильной дороги Барнаул - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области, км 225 + 663 с мостом через канал Магистральный в Каменском районе	2019 год	2020 год	-	37,48	-	60000	-	37,48	60000	-	-	-	60000	
41.	Реконструкция автомобильной дороги Шипуново - Краснощеково - Курья, км 75 + 810 с мостом через Сухое русло в Краснощековском районе	2019 год	2020 год	-	5	-	30000	-	5	30000	-	-	-	30000	
42.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Новофирсово, км 0 + 000 с мостом через р. Локтевка в Курьинском районе	2019 год	2020 год	-	42	-	65000	-	42	65000	-	-	-	65000	
43.	Реконструкция автомобильной дороги Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан, км 13 + 322 с мостом через канал в Крутихинском районе	2019 год	2020 год	-	37,5	-	60000	-	37,5	60000	-	-	-	60000	
44.	Реконструкция автомобильной дороги Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан с мостом через канал в Крутихинском районе на км 17 + 228	2019 год	2020 год	-	51,5	-	70000	-	51,5	70000	-	-	-	70000	
45.	Реконструкция автомобильной дороги Самарка - Ермошиха, км 1 + 425 - км 1 + 625 с мостом через р. Золотушка в Локтевском районе	2018 год	2019 год	-	24	-	40000	-	24	40000	-	-	40000	-	
46.	Реконструкция автомобильной дороги Волчиха - Родино - Благовещенка - Кулунда, км 86 + 855 с мостом через канал Магистральный в Родинском районе	2019 год	2020 год	-	48,9	-	65000	-	48,9	65000	-	-	-	65000	
47.	Реконструкция автомобильной дороги Алейск - Петропавловское - Смоленское, км 227 + 280 - км 227 + 580 с мостом через р. Песчаная в Смоленском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	-	150	-	250000	-	150	-	-	-	125000	125000	
48.	Реконструкция автомобильной дороги Солоновка - Красный Городок, км 4 + 200 - км 4 + 500 с мостом через р. Песчаная в Смоленском районе	2018 год	2019 год	-	9	-	30000	-	9	30000	-	-	30000	-	
49.	Реконструкция автомобильной дороги Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай, км 121 + 777 - км 122 + 277 с мостом через р. Ануй в Солонешенском районе	30.01.2017 N 22-1-1-3-0002-17
30.01.2017 N 3-2-1-0002-17	2019 - 2020 годы	-	28,6	-	68448,52	-	28,6	75500	-	-	40000	35500	
50.	Реконструкция автомобильной дороги Чарышское - Малый Бащелак - Большой Бащелак - Тальменка - Солонешное, км 61 + 452 с мостом через ручей Выдрин в Солонешенском районе	2019 год	2020 год	-	15	-	35000	-	15	35000	-	-	-	35000	
51.	Реконструкция автомобильной дороги Мартыново - Тогул - Залесово, км 22 + 164 - км 22 + 364 с мостом через р. Уксунай в Тогульском районе	2018 год	2019 - 2020 годы	-	89,61	-	160000	-	89,61	160000	-	-	80000	80000	
52.	Реконструкция автомобильной дороги Мартыново - Тогул - Залесово, км 26 + 050 - км 26 + 200 с мостом через р. Тогул в Тогульском районе	2018 год	2019 - 2020 годы	-	89	-	160000	-	89	160000	-	-	80000	80000	
54.	Реконструкция автомобильной дороги Бийск - Соколово - Акутиха - Солдатово с мостом через р. Чемровка км 11 + 038 в Зональном районе	2019 год	2020 год	-	101,31	-	250000	-	101,31	250000	-	-	-	250000	
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
	
55.	Реконструкция автомобильной дороги Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай с мостом через реку Неня км 80 + 355 в Солтонском районе	2019 год	2020 год	-	127,92	-	270000	-	127,92	270000	-	-	-	270000	
56.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области с мостом через реку Чумыш км 129 + 633 в Ельцовском районе	2019 год	2020 год	-	168,75	-	200000	-	168,75	200000	-	-	-	200000	
57.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловское - Камышенка - а/д К-12 с мостом через реку Ануй км 2 + 000 в Петропавловском районе	2019 год	2020 год	-	215,88	-	400000	-	215,88	400000	-	-	-	400000	
58.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Чарышское 1 - Малый Бащелак - Большой Бащелак - Тальменка - Солонешное с мостом через реку Ануй км 69 + 475 в Солонешенском районе	2019 год	2020 год	-	108,98	-	150000	-	108,98	150000	-	-	-	150000	
59.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловское - Камышенка - а/д К-12 с мостом через реку Ануй км 2 + 000 в Петропавловском районе	2019 год	2020 год	-	215,88	-	400000	-	215,88	400000	-	-	-	400000	
60.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Аллак в Каменском районе	30.08.2017 N 22-1-1-3-0063-17;
31.08.2017 N 2-6-1-0162-17	2018 год	0,94	-	-	29539,578	0,94	-	25942,337	-	25942,337	-	-	
61.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Ключевка в Ребрихинском районе	25.08.2017 N 22-1-1-3-0058-17;
25.08.2017 N 1-6-1-0158-17	2018 год	1,145	-	-	26968,984	1,145	-	23751,808	-	23751,808	-	-	
62.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Тосток в Солтонском районе Алтайского края	25.08.2017 N 22-1-1-3-0059-17;
25.08.2017 N 1-6-1-0159-17	2018 год	0,65	-	-	24075,761	0,65	-	20799,881	-	20799,881	-	-	
63.	Реконструкция автомобильной дороги Н-0903 Лебяжье - Перешеечный в Егорьевском районе	25.08.2017 N 22-1-1-3-0060-17;
25.08.2017 N 2-6-1-0160-17	2018 год	2,544	-	-	57888,816	2,544	-	53976,446	-	53976,446	-	-	
64.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Назаровка в Рубцовском районе	14.03.2017 N 22-1-1-3-0026-17;
14.03.2017 N 1-6-1-0025-17	2018 год	0,271
63	-	-	10995,464	0,27163	-	9045,464	-	9045,464	-	-	
65.	Строительство подъезда к животноводческой ферме СПК (колхоз) "Предгорный" в Красногорском районе	13.03.2017 N 22-1-1-30016-17, 13.03.2017 N 1-6-1-0017-17	2018 год	0,814
37	-	-	21727,592	0,81437	-	18445,082	-	18445,082	-	-	
66.	Строительство подъезда к подсобному хозяйству Квашнина В.В. в Красногорском районе (2 этап)	30.08.2017 N 22-1-1-3-0062-17;
30.08.2017 N 1-6-1-0161-17	2018 год	1,25	-	-	26298,464	1,25	-	22657,554	-	22657,554	-	-	
67.	Строительство подъезда до животноводческого комплекса ООО "Октябрьское" в Зональном районе	02.08.2017 N 22-1-1-2-0050-17;
02.08.2017 N 1-6-1-0150-17	2018 год	1,51	-	-	56119,747	1,51	-	50979,017	-	50979,017	-	-	
68.	Строительство подъезда от с. Покровка до животноводческой фермы "Колос" в Локтевском районе	30.10.2017 N 22-1-1-3-0084-17;
30.10.2017 N 1-6-1-0185-17	2018 год	0,681	-	-	21532,081	0,681	-	18686,581	-	18686,581	-	-	
69.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Кызылту в Панкрушихинском районе	27.10.2017 N 22-1-1-3-0081-17;
27.10.2017 N 2-6-1-0182-17	2018 год	5,282	-	-	92272,606	5,282	-	87840,026	-	87840,026	-	-	
70.	Строительство подъезда к животноводческой ферме на 620 голов КРС ООО "Возрождение" в Ребрихинском районе	27.07.2017 N 22-1-1-2-0049-17;
27.07.2017 N 1-6-1-0149-17	2018 год	1,006	-	-	23345,561	1,006	-	20391,561	-	20391,561	-	-	
71.	Реконструкция автомобильной дороги Табуны - Александровка в Табунском районе	30.10.2017 N 22-1-1-3-0082-17;
30.10.2017 N 2-6-1-0183-17	2018 год	7,87	-	-	122020,046	7,87	-	116607,79	-	116607,79	-	-	
72.	Строительство подъезда к конному комплексу ООО "Алтайский конный завод N 39" ООО АПО "Казачья Станица" в Тюменцевском районе	30.10.2017 N 22-1-1-3-0083-17;
30.10.2017 N 1-6-1-0184-17	2018 год	0,746	-	-	26505,298	0,746	-	24273,288	-	24273,288	-	-	
73.	Строительство автомобильной дороги Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь	2017 год	2019 год	62,8	-	-	56000000	62,8	-	56000000	-	-	2000000	54000000	
74.	Реконструкция автомобильной дороги Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области, км 134 + 000 - км 144 + 000 в Ельцовском районе	2017 год	2019 год	4	-	-	196283,88	4	-	189143,27	-	-	189143,27	-	
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
	
76.	Строительство автомобильной дороги Обход г. Славгорода	12.10.2017 N 22-1-1-3-0077-17
12.10.2017 N 1-6-1-0180-17	2019 год	18,837	-	-	2076303,78	18,837	-	2076303,78	-	-	1000000	1076303,78	
77.	Реконструкция автомобильной дороги Мартыново - Тогул - Залесово, км 61 + 443 - км 61 + 943 с мостом через р. Чумыш в Кытмановском районе	14.03.2017 N 22-1-1-30024-17
14.03.2017 N 2-6-1-0023-17	2018 - 2020 годы	0,675	174,8	-	430000	0,675	174,8	430000	-	50000	100000	280000	
78.	Реконструкция автомобильной дороги Селекционное - Райгород - Екатериновка г. Славгород	2018 год	2019 - 2020 годы	24	-	-	720000	24	-	720000	-	-	320000	400000	
79.	Реконструкция автомобильной дороги К-58 - Чеканиха до паромной переправы через р. Обь в Троицком районе	2018 год	2019 - 2020 годы	38	-	-	1140000	38	-	1140000	-	-	500000	640000	
80.	Строительство подъезда к объектам К(Ф)Х Черепанов А.И. в Шипуновском районе	2018 год	2019 год	1,8	-	-	75600	1,8	-	75600	-	-	75600	-	
81.	Строительство подъезда к с. Большой Лог в Крутихинском районе	2018 год	2019 год	0,5	-	-	15000	0,5	-	15000	-	-	15000	-	
82.	Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ОАО "Новообинцевское" в Шелаболихинском районе	2018 год	2019 год	5	-	-	150000	5	-	150000	-	-	150000	-	
83.	Строительство подъезда к молочно-товарной ферме СПК "Колхоз им. Мамонтова" в Ребрихинском районе	2018 год	2019 год	1,3	-	-	54600	1,3	-	54600	-	-	54600	-	
84.	Строительство подъезда к молочно-товарной ферме ЗАО "Урожайное" в Советском районе	2018 год	2019 год	2,23	-	-	93660	2,23	-	93660	-	-	93660	-	
85.	Строительство подъезда к крестьянским (фермерским) хозяйствам с. Семеновка в г. Славгороде	2018 год	2019 год	2,5	-	-	105000	2,5	-	105000	-	-	105000	-	
86.	Строительство подъезда к объектам ООО "Украинское" в г. Славгороде	2018 год	2019 год	2,5	-	-	105000	2,5	-	105000	-	-	105000	-	
87.	Строительство подъезда к объектам ИП КФХ "Гольштейн" в г. Славгороде	2018 год	2019 год	3	-	-	126000	3	-	126000	-	-	126000	-	
88.	Строительство подъезда от с. Камышенка до молочно-товарной фермы в Петропавловском районе	2018 год	2019 год	2,78	-	-	42009,39	2,78	-	42009,39	-	-	42009,39	-	
89.	Строительство подъезда от с. Камышенка до маслосырзавода в Петропавловском районе	2018 год	2019 год	0,6	-	-	18000	0,6	-	18000	-	-	18000	-	
90.	Строительство подъезда от с. Полуямки до производственной базы МТФ ООО КХ "Партнер" в Михайловском районе	2019 год	2020 год	3,4	-	-	102000	3,4	-	102000	-	-	-	102000	
91.	Строительство подъезда от с. Лебяжье до производственной базы племенного завода ООО "Лебяжье" фермы N 2 в Егорьевском районе	2018 год	2019 год	1,417	-	-	23145,65	1,417	-	23145,65	-	-	23145,65	-	
92.	Строительство подъезда от с. Сросты до племенной фермы племзавода КХВ "Наука" в Егорьевском районе	2018 год	2019 год	2	-	-	60000	2	-	60000	-	-	60000	-	
93.	Строительство подъезда от с. Глубокое от ул. Центральная до МТФ N 1 в Завьяловском районе	2019 год	2020 год	0,6	-	-	18000	0,6	-	18000	-	-	-	18000	
94.	Строительство подъезда от с. Глубокое до МТФ N 3 на 650 голов по пер. Садовый, ул. Камышенская в Завьяловском районе	2019 год	2020 год	3	-	-	90000	3	-	90000	-	-	-	90000	
95.	Строительство подъезда от с. Паутово до молочно-товарной фермы в Петропавловском районе	2019 год	2020 год	3,1	-	-	93000	3,1	-	93000	-	-	-	93000	
96.	Строительство подъезда от с. Первомайское до фермы АКГУП "Бийское" в Бийском районе	2019 год	2020 год	0,84	-	-	25200	0,84	-	25200	-	-	-	25200	
97.	Строительство подъезда к МТФ бригадам N 2 и N 3 в Краснощековском районе	2019 год	2020 год	4	-	-	120000	4	-	120000	-	-	-	120000	
98.	Строительство подъезда от с. Хлеборобное до производственной базы СПК "Хлеборобный" ферма N 1 в Быстроистокском районе	2018 год	2019 год	2	-	-	60000	2	-	60000	-	-	60000	-	
99.	Строительство подъезда от автомобильной дороги Павловск - Клочки - Ребриха до производственной базы ООО "Вепрь" в Ребрихинском районе	2018 год	2019 год	0,47	-	-	11573,55	0,47	-	11573,55	-	-	11573,55	-	
100.	Строительство подъезда от с. Волчиха до животноводческого комплекса ИП Глава КФХ Горбов Д.Д. в Волчихинском районе	2018 год	2019 год	0,292	-	-	8410,42	0,292	-	8410,42	-	-	8410,42	-	
101.	Строительство подъезда к ферме в с. Корболиха в Третьяковском районе	2019 год	2020 год	0,3	-	-	9000	0,3	-	9000	-	-	-	9000	
102.	Строительство подъезда от с. Кирей до фермы ООО "Мерабилитское" в Кулундинском районе	2019 год	2020 год	0,3	-	-	9000	0,3	-	9000	-	-	-	9000	
103.	Строительство подъезда на ферму в с. Староалейское, колхоз "Алей" в Третьяковском районе	2019 год	2020 год	3	-	-	90000	3	-	90000	-	-	-	90000	
104.	Строительство подъезда на ферму в пос. Новогальцовка, колхоз "Алей" в Третьяковском районе	2019 год	2020 год	1,5	-	-	45000	1,5	-	45000	-	-	-	45000	
105.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Городецкий в Кулундинском районе	2018 год	2019 год	0,3	-	-	8700	0,3	-	8700	-	-	8700	-	
106.	Строительство подъездов ИП "Саргасян" к фермам N 1 и N 2 в с. Первокаменка, к ферме в с. Шипуниха, к ферме в с. Красное Раздолье в Третьяковском районе	2019 год	2020 год	2,4	-	-	72000	2,4	-	72000	-	-	72000	-	
107.	Строительство подъезда к с. Ясная Поляна через с. Верх-Боровлянка до производственной фермы ООО "Верх-Боровлянское" в Ребрихинском районе	2018 год	2019 год	1,46	-	-	43800	1,46	-	43800	-	-	43800	-	
108.	Строительство подъезда от с. Бочкари до фермы и бригады ООО "БочкариАгро" в Целинном районе	2019 год	2020 год	4,7	-	-	141000	4,7	-	141000	-	-	-	141000	
109.	Строительство подъезда от с. Верх-Ануйское до производственной базы ООО "Вектор" в Волчихинском районе	2019 год	2020 год	3,5	-	-	105000	3,5	-	105000	-	-	-	105000	
110.	Строительство подъезда от автомобильной дороги Ребриха - Усть-Мосиха до производственной базы ООО "Возрождение" в Ребрихинском районе	2019 год	2020 год	1,1	-	-	33000	1,1	-	33000	-	-	-	33000	
111.	Строительство подъезда от автомобильной дороги "Кулунда - Славгород" до фермы в с. Кротовка в Кулундинском районе	2019 год	2020 год	0,8	-	-	24000	0,8	-	24000	-	-	-	24000	
112.	Строительство подъезда от с. Ново-Озерное до МТФ ООО "Тягунское" в Кытмановском районе	2019 год	2020 год	2,5	-	-	75000	2,5	-	75000	-	-	-	75000	
113.	Строительство подъезда от автомобильной дороги Белово - Рожнев Лог - Чернявка до производственной базы ИП Глава КВХ Чурилов Ю.И.	2019 год	2020 год	0,65	-	-	19500	0,65	-	19500	-	-	-	19500	
114.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Паново в Ребрихинском районе	2018 год	2019 год	1	-	-	31000	1	-	31000	-	-	31000	-	
115.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Касмалинка в Ребрихинском районе	2018 год	2019 год	0,3	-	-	8100	0,3	-	8100	-	-	8100	-	
116.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Зеленая Дубрава в Родинском районе	2018 год	2019 год	8	-	-	216000	8	-	216000	-	-	216000	-	
117.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Устьянка в Локтевском районе	2018 год	2019 год	2,1	-	-	63000	2,1	-	63000	-	-	63000	-	
118.	Реконструкция автомобильной дороги Тумановка - Матвеевка в Солонешенском районе	2018 год	2019 год	8	-	-	216000	8	-	216000	-	-	216000	-	
119.	Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе	2018 год	2019 год	0,26	-	-	10920	0,26	-	10920	-	-	10920	-	
120.	Строительство подъезда к заводу по производству молочной продукции ООО "Рикон" в Калманском районе	2018 год	2019 год	4,5	-	-	198000	4,5	-	198000	-	-	198000	-	
121.	Строительство подъезда к производственному комплексу завода по производству фармацевтической продукции ООО "Катунь-Олеум" в Советском районе	2018 год	2019 год	0,7	-	-	30800	0,7	-	30800	-	-	30800	-	
122.	Реконструкция автомобильной дороги Акатьево - Сузоп - Новотроицк в Солтонском районе	2018 год	2020 год	4,588	-	-	170581,84	4,588	-	170581,84	-	-	-	170581,84	
123.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Кротовка в Кулундинском районе	2018 год	2019 год	1,357	-	-	24041,39	1,357	-	24041,39	-	-	24041,39	-	
124.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Литвиновка в Тальменском районе	2018 год	2019 год	1,8	-	-	52200	1,8	-	52200	-	-	52200	-	
125.	Строительство подъезда к "Генетическому центру "Корова и теленок" на 2400 голов ООО "АПО "Казачья станица" в Троицком районе	2018 год	2019 год	3,984	-	-	64801,46	3,984	-	64801,46	-	-	64801,46	-	
126.	Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО "Племрепродуктор "Чистюньский" в Топчихинском районе	2018 год	2019 год	0,7	-	-	29400	0,7	-	29400	-	-	29400	-	
127.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Поперечное в Хабарском районе	2018 год	2019 год	0,5	-	-	15000	0,5	-	15000	-	-	15000	-	
128.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Андреевка в Шипуновском районе	2019 год	2020 год	0,2	-	-	6000	0,2	-	6000	-	-	-	6000	
129.	Реконструкция автомобильной дороги Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава в Баевском районе	2018 год	2019 год	4,5	-	-	13500	4,5	-	13500	-	-	13500	-	
130.	Реконструкция автомобильной дороги Усть-Волчиха - Усть-Кормиха в Волчихинском районе	2019 год	2020 год	7,7	-	-	231000	7,7	-	231000	-	-	-	231000	
131.	Реконструкция автомобильной дороги Бийск - Соколово - Акутиха - Солдатово в Быстроистокском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	22,5	-	-	675000	22,5	-	675000	-	-	250000	425000	
132.	Реконструкция автомобильной дороги Голуха - Тягун - Аламбай в Заринском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	31,1	-	-	951000	31,1	-	951000	-	-	451000	500000	
133.	Реконструкция автомобильной дороги Змеиногорск - Барановка - Лазурка в Змеиногорском районе	2019 год	2020 год	6	-	-	180000	6	-	180000	-	-	-	180000	
134.	Реконструкция автомобильной дороги III Интернационал - Столбово - Ключи в Каменском районе	2019 год	2020 год	5,824	-	-	174000	5,824	-	174000	-	-	-	174000	
135.	Реконструкция автомобильной дороги Краснощеково - Суетка - Усть-Белое в Краснощековском районе	2018 год	2019 год	11,8	-	-	354000	11,8	-	354000	-	-	354000	-	
136.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Дворскому в Немецком национальном районе	2019 год	2020 год	3,394	-	-	101820	3,394	-	101820	-	-	-	101820	
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.	
	
138.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Пановка, г. Славгород	2019 год	2020 год	7	-	-	210000	7	-	210000	-	-	-	210000	
139.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Павловка, г. Славгород	2018 год	2019 год	6	-	-	180000	6	-	180000	-	-	180000	-	
140.	Реконструкция автомобильной дороги Ларичиха - Сандалово - Шипицино в Тальменском районе	2019 год	2020 год	28		-	840000	28	-	840000	-	-	-	840000	
141.	Реконструкция автомобильной дороги Наумово - Речкуново в Тальменском районе	2019 год	2020 год	7,1	-	-	213000	7,1	-	213000	-	-	-	213000	
142.	Реконструкция автомобильной дороги Буланиха - ст. Буланиха - Боровлянка - Уткино - Клепиково - р. Обь в Троицком и Усть-Пристанском районах	2019 год	2020 год	18	-	-	540000	18	-	540000	-	-	-	540000	
143.	Реконструкция автомобильной дороги Р-256 - Гордеевский - Заводское - Куличье - Озеро Петровское в Троицком районе	2019 год	2019 - 2020 годы	24	-	-	720000	24	-	720000	-	-	320000	400000	
144.	Реконструкция автомобильной дороги Р-256 - Беловский - Южаково - Многоозерный - Боровлянка в Троицком районе	2019 год	2019 - 2020 годы	11	-	-	330000	11	-	330000	-	-	130000	200000	
145.	Реконструкция автомобильной дороги Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка в Чарышском районе	2019 год	2020 год	0,4	-	-	12000	0,4	-	12000	-	-	-	12000	
146.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пос. Октябрьский в Алейском районе	2019 год	2020 год	1,5	-	-	45000	1,5	-	45000	-	-	-	45000	
147.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Малетино в Каменском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	16	-	-	480000	16	-	480000	-	-	240000	240000	
148.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Красный Яр в Ключевском районе	2018 год	2019 год	0,5	-	-	15000	0,5	-	15000	-	-	15000	-	
149.	Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Золотушка в Краснощековском районе	2019 год	2020 год	0,7	-	-	21000	0,7	-	21000	-	-	-	21000	
150.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Лесному в Немецком национальном районе	2019 год	2020 год	0,62	-	-	18600	0,62	-	18600	-	-	-	18600	
151.	Реконструкция автомобильной дороги Покровка - Жилино - Новочесноковка (включая подъезд к с. Новочесноковка) в Первомайском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	8,1	-	-	243000	8,1	-	243000	-	-	143000	100000	
152.	Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр - Кокши - Талица - Урожайное в Советском районе	2019 год	2020 год	0,65	-	-	19500	0,65	-	19500	-	-	-	19500	
153.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Сосновка в Советском районе	2019 год	2020 год	1,68	-	-	50400	1,68	-	50400	-	-	-	50400	
154.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Тележиха в Солонешенском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	10,1	-	-	303000	10,1	-	303000	-	-	103000	200000	
155.	Реконструкция автомобильной дороги Тальменка - Староперуново - Воронежская - Молодежная в Тальменском районе	2019 год	2020	3,4	-	-	102000	3,4	-	102000	-	-	-	102000	
156.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Лопатинка в Третьяковском районе	2019 год	2020 год	3,8	-	-	114000	3,8	-	114000	-	-	-	114000	
157.	Реконструкция автомобильной дороги Троицкое - Тюмень - Беловский - Боровлянский - Ленинский - Южаково в Троицком районе	2019 год	2020 год	1,5	-	-	45000	1,5	-	45000	-	-	-	45000	
158.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Кипешино в Троицком районе	2019 год	2020 год	1,4	-	-	42000	1,4	-	42000	-	-	-	42000	
159.	Реконструкция автомобильной дороги Лаптев Лог - Наумовка в Угловском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	12	-	-	360000	12	-	360000	-	-	180000	180000	
160.	Реконструкция автомобильной дороги Мирный Павловка - Алексеевка в Угловском районе	2019 год	2020 год	1,8	-	-	54000	1,8	-	54000	-	-	-	54000	
161.	Реконструкция автомобильной дороги Угловское - Симоново - Валовый Кордон в Угловском районе	2019 год	2020 год	6	-	-	180000	6	-	180000	-	-	-	180000	
162.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Романово в Усть-Пристанском районе	2019 год	2020 год	1,5	-	-	45000	1,5	-	45000	-	-	-	45000	
163.	Реконструкция автомобильной дороги Маяк - Красные Орлы - Чайное в Чарышском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	10,3	-	-	309000	10,3	-	309000	-	-	109000	200000	
164.	Реконструкция автомобильной дороги Шелаболиха - Иня в Шелаболихинском районе	2019 год	2019 - 2020 годы	8,586	-	-	257580	8,586	-	257580	-	-	157580	100000	
165.	Строительство подъезда к производственному цеху свиноводческого комплекса на 24000 голов ООО "Альтаир-Агро" в Ребрихинском районе	03.11.2017 N 22-1-1-3-0091-17; 03.11.2017 N 1-6-1-0187-17	2019 год	1,1	-	-	22404,75	1,1	-	22404,75	-	-	22404,75	-	
166.	Строительство автомобильной дороги с. Урожайное - Заказник "Лебединый" в Советском районе	10.04.2017 N 22-1-1-3-0028-17; 10.04.2017 N 1-6-1-0056-17	2020 год	1,88	-	-	37223,39	1,88	-	37223,39	-	-	-	37223,39